1 февраля 2010 года N 4

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ЗАКОН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА"

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан
21 января 2010 года

Статья 1

Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года" (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Президент
Республики Дагестан
М.АЛИЕВ
Махачкала
1 февраля 2010 г.
N 4

Утверждена
Законом Республики Дагестан
"Об утверждении республиканской
целевой программы
"Развитие территориальных
автомобильных дорог общего
пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ
И ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ

     Наименование                     Республиканская целевая программа
     Программы                        "Развитие территориальных
                                      автомобильных дорог общего
                                      пользования Республики Дагестан
                                      на период 2010-2015 годов
                                      и до 2020 года"

     Основание для                    План мероприятий по реализации
     разработки Программы             Послания Президента Республики
                                      Дагестан на 2008 год, утвержденный
                                      постановлением Правительства
                                      Республики Дагестан от 1 августа
                                      2008 года N 281

     Государственный заказчик         Правительство Республики Дагестан
     Программы

     Разработчик Программы            Государственное учреждение
                                      "Управление автомобильных дорог
                                      Республики Дагестан"
                                      (ГУ "Дагестанавтодор")

     Исполнитель Программы            Государственное учреждение
                                      "Управление автомобильных дорог
                                      Республики Дагестан"
                                      (ГУ "Дагестанавтодор")

     Цели Программы                   Дальнейшее развитие
                                      и совершенствование сети
                                      территориальных автомобильных дорог
                                      общего пользования Республики
                                      Дагестан, обеспечивающее
                                      экономический рост, повышение уровня
                                      жизни населения и укрепление
                                      обороноспособности государства

                                      снижение транспортных издержек
                                      в экономике

                                      повышение комплексной безопасности
                                      и устойчивости транспортного
                                      комплекса

     Задачи Программы                 Увеличение протяженности дорог
                                      общего пользования республиканского
                                      и межмуниципального значения,
                                      соответствующих нормативным
                                      требованиям

                                      создание условий для формирования
                                      единой дорожной сети, круглосуточно
                                      доступной для населения

                                      повышение надежности и безопасности
                                      движения на территориальных
                                      автомобильных дорогах общего
                                      пользования Республики Дагестан

                                      обеспечение устойчивого
                                      функционирования дорог общего
                                      пользования республиканского
                                      и межмуниципального значения

     Сроки реализации                 2010-2015 годы и до 2020 года
     Программы

     Важнейшие показатели             В 2015 году:
     Программы                        доля протяженности дорог общего
                                      пользования республиканского
                                      и межмуниципального значения,
                                      соответствующих нормативным
                                      требованиям к транспортно-
                                      эксплуатационным показателям,
                                      составит 54%, или 1338 км

                                      количество районных центров,
                                      соединенных автомобильными дорогами
                                      с усовершенствованным покрытием,
                                      составит 38, или 92,7% от общего
                                      количества районных центров

                                      прирост количества сельских
                                      населенных пунктов, обеспеченных
                                      круглосуточной связью с сетью
                                      дорог общего пользования по дорогам
                                      с твердым покрытием, составит 13
                                      единиц

     Объемы и источники               Общий объем финансирования
     финансирования Программы         Программы составляет 16343,46 млн.
                                      рублей (в ценах 2008 года), из них:
                                      средства федерального бюджета -
                                      7843,46 млн. руб.
                                      средства республиканского бюджета
                                      Республики Дагестан - 8500,0 млн.
                                      руб.

     Ожидаемые результаты             Увеличение протяженности дорог
     реализации Программы             общего пользования республиканского
                                      и межмуниципального значения
                                      с усовершенствованным покрытием
                                      составит 141 км

                                      увеличение протяженности
                                      автомобильных дорог более высоких
                                      категорий составит 447 км,

                                      в том числе высших (I-II)
                                      категорий - 90 км

     Контроль за выполнением          Контроль за выполнением Программы
     Программы                        осуществляет Правительство
                                      Республики Дагестан.

1. Введение

Территориальные автомобильные дороги общего пользования Республики Дагестан являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности Российской Федерации на южных рубежах. Они связывают значительную часть территорий республики, обеспечивая жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, и во многом определяют возможности развития районов и республики в целом. По ним осуществляются самые массовые перевозки грузов и пассажиров.
Сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Их значение постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг.
Дальнейшее развитие сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан в условиях повышения экономической активности и интенсивной автомобилизации населения республики должно обеспечить не только соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта и доступ к населенным пунктам, но и решение задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.
Развитие сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан с 2001 года осуществлялось в рамках Программы совершенствования и развития автомобильных дорог Республики Дагестан на период 2001-2010 годов "Дороги Дагестана XXI века", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 декабря 2002 года N 266, предусматривающей решение всего комплекса задач, стоящих перед дорожной отраслью, и постепенное доведение уровня транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети до среднероссийского.
К сожалению, из-за ежегодного недофинансирования дорожной отрасли предусмотренные плановые показатели настоящей Программы в части строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в полной мере реализовать не удалось.

2. Современное состояние дорожного хозяйства
Республики Дагестан

В настоящее время протяженность территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан составляет 8159 км, в том числе федерального значения - 643 км.
Административно-территориальное деление, сложные рельефно-геологические условия местности, наличие большого количества малых и средних рек, водотоков - все это не могло не повлиять на распределение и конфигурацию дорожной сети республики, ее разветвленность и протяженность.
Плотность территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан с твердым покрытием - 152 км на 1000 кв. км территории.
Основу дорожной сети республики составляют дороги общего пользования республиканского и межмуниципального значения общей протяженностью 2478 км, значительная часть которых - это дороги, соединяющие столицу республики с административными центрами районов.
Конфигурация дорожной сети республики сформирована исторически, в горных условиях они проходят в основном по долинному ходу вдоль водотоков.
В последние годы в обход трудно проезжаемых перевальных участков ряда важнейших республиканских дорог построены обходные дороги, в корне изменившие схему автотранспортного обеспечения районов Нагорного Дагестана (Урма - Губден, Чалда - Карадах и Гимры - Чирката).
В основном дороги республиканского значения ориентированы на столицу республики г. Махачкалу посредством выхода на федеральные дороги. На их долю приходится основная тяжесть перевозок.
Несмотря на то что за последние годы в республике проделана значительная работа по развитию дорожной отрасли и решены такие вопросы, как создание опорной сети автодорог, почти полная ликвидация бездорожья, создание бесперевальных маршрутов движения и т.д., уровень транспортно - эксплуатационного состояния значительной части территориальных дорог не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня и оставляет желать лучшего.
Лишь 2424 км дорог, или 32,2% от общей протяженности, имеют усовершенствованное покрытие. По этому показателю республика занимает последнее место в Северо-Кавказском регионе и одно из последних в Российской Федерации.
Очень низка в общей структуре доля высококатегорийных дорог - лишь 0,3%.
Более 30% из 1200 эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах требуют реконструкции и перестройки, 40% - проведения планово-предупредительных ремонтных работ.
Многие участки дорог республиканского значения, проходящие в горной части, по своим техническим параметрам и транспортно-эксплуатационным показателям не соответствуют современным нормативным требованиям по обеспечению безопасности движения и требуют реконструкции.
Практически все автомобильные дороги республиканского значения имеют по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность дорог, безопасность и скоростное обслуживание современных транспортных средств.
Свыше 50% автомобильных дорог республиканского значения с асфальтобетонным покрытием требуют увеличения прочностных характеристик из-за деградации дорожных одежд вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.
13 районных центров не соединены с опорной сетью дорогами с асфальтобетонным покрытием.
Более 70% местных дорог в горной части по своим техническим параметрам не соответствуют нормативам даже V технической категории и являются практически автопролазами.
Отдельной проблемой является ликвидация бездорожья.
К населенным пунктам, расположенным в Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском, Рутульском, Ахтынском и Ботлихском районах, где проживает 5575 тыс. человек, вообще нет подъездных дорог.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения республики и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений для реализации приоритетных национальных проектов и темпов социально-экономического развития республики.
Кроме того, отставание темпов развития дорожной сети от роста автомобилизации и увеличения интенсивности движения приводит к росту уровня аварийности, который в республике на данном этапе является одним из самых высоких в Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:
дальнейшее развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения и укрепление обороноспособности государства;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса.
Для дальнейшего развития и совершенствования сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет реконструкции и капитального ремонта наиболее загруженных участков дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием, а также имеющих переходной тип покрытия.
Для достижения повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог Республики Дагестан необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
Это позволяет обеспечить рациональное автомобильное сообщение с сельскими населенными пунктами, вывести транзитные транспортные потоки из городов и районных центров за счет строительства новых участков дорог.
Для достижения повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на территориальных автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан, а также обеспечением устойчивого функционирования сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан.

4. Сроки реализации и важнейшие показатели Программы

Сроки реализации Программы - 2010-2015 годы и до 2020 года.
В 2015 году:
доля протяженности дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 54%, или 1338 км;
количество районных центров, соединенных автомобильными дорогами с усовершенствованным покрытием, составит 38, или 92,7% от общего количества районных центров;
прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглосуточной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием составит 13 единиц.

5. Перечень мероприятий Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий (в соответствии с приложениями NN 1-12 к Программе).
В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, запланированы мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог по важнейшим направлениям и маршрутам, в обход населенных пунктов, а также перестройке и ремонту непригодных искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами дорог, в частности:
1) завершение в 2010 году реконструкции автодороги Грозный - Ботлих - Араканская площадка на участке Араканский мост - Араканская площадка;
2) реконструкция автодороги Манас - Сергокала - Первомайское на участке Манас - Карабудахкент - Губден;
3) реконструкция автодороги Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб на участке Леваши - Ташкапур;
4) реконструкция автодороги Муни - Агвали протяженностью 30 км;
5) реконструкция автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис на участке км 16 - км 38;
6) реконструкция автодороги Ново-Гапцах - Тагиркент - Ялама.
Предусматривается также включить в сеть дорог федерального значения автодороги Хасавюрт - Бабаюрт, Махачкала - Буйнакск - Гимры - Чирката - Сагринский мост - Тлох - Ботлих и Махачкала - Аэропорт с подъездом к г. Каспийску общей протяженностью 219 км после завершения их строительства и реконструкции.
В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, запланированы мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей по автомобильным дорогам с городами, районными центрами и населенными пунктами, в частности:
1) завершение в 2010 году строительства автомагистрали Махачкала - Аэропорт с подъездом к г. Каспийску I технической категории;
2) модернизация автодорог:
Хасавюрт - Тлох на участке км 78 - км 92;
Тлярата - Мехельта на участке км 0 - км 4;
Магарамкент - Рутул на участке Ахты - Рутул;
Касумкент - Курах;
Гуниб - Цуриб;
Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке Вачи - Кумух;
Мамедкала - Хучни;
Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал на участке Гидатлинский мост - Анцух;
3) реконструкция автодорог, ведущих к местам дислокации пограничных застав в Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском, Рутульском, Ахтынском и Докузпаринском районах (согласно приложению N 3);
4) строительство и реконструкция автодорог, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с дорогами республиканского и межмуниципального значения (согласно приложению N 4).
За период действия Программы предусматривается обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования, по дорогам с твердым покрытием в количестве не менее 13 единиц. Эта работа скоординирована с мероприятиями подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" ("Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 года N 377 (согласно приложению N 5).
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения на территориальных автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан, предусматриваются следующие мероприятия:
1) ремонт дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения (согласно приложению N 7):
Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края;
Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка;
Хасавюрт - Гребенская;
Кизилюрт - Костек;
Кизилюрт - Шамхалянгиюрт - Сулак;
Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб;
Леваши - Сергокала;
Манас - Сергокала - Первомайское;
Цудахар - Акуша;
Грозный - Ботлих - Араканская площадка на участке Хунзах - Араканский мост;
Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал;
Мамраш - Ташкапур - Араканский мост;
Дербент - Хучни - Хив;
Магарамкент - Ахты - Рутул;
Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала;
Карабудахкент - Нижний Дженгутай;
Буйнакск - Кизилюрт;
2) реконструкция и ремонт мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
3) обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного движения, ограждающими устройствами, информационными щитами и указателями, табло с переменной информацией, развитие контрольно-надзорной деятельности в области дорожного хозяйства, в частности, создание пунктов весового контроля за движением большегрузного автотранспорта (согласно приложению N 10);
4) целевые работы по планово-предупредительному ремонту мостов, железнодорожных переездов и горизонтальной разметке автомобильных дорог.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение
и развитие дорожно-строительной индустрии

Потребность в основных материально-технических ресурсах для выполнения Программы будет определена с учетом следующих факторов:
возможности привлечения части высвобождающихся ресурсов из других отраслей;
формирования потребностей дорожных организаций в оборудовании и механизмах с учетом выбытия устаревшей техники и развития рыночных отношений, стимулирующих более эффективное использование основных фондов;
воздействия научно-технического прогресса, внедрения новых технологий.
Современное состояние рынка не требует специальных мер по формированию государственных заказов на материально-технические ресурсы, так как удовлетворение в них будет осуществляться в соответствии с объемами финансирования дорожных работ.

Трудовые ресурсы

Осуществление Программы потребует привлечения значительных трудовых ресурсов, что в определенной мере будет способствовать решению социальных проблем.
Общая численность работников, занятых в реализации Программы, к 2015 году возрастет до 3500 человек.
Ожидается, что основной резерв для пополнения численности в отрасли составят:
люди, потерявшие работу в других отраслях;
уволенные в запас военнослужащие;
беженцы и переселенцы.
Несмотря на то что процент замещаемости инженерно-технических работников с высшим и средним специальным образованием в ГУ "Дагестанавтодор" один из самых высоких по сравнению с другими регионами, здесь уделяется большое внимание вопросам обучения и подготовки кадров.
В частности, предполагается ежегодно обучать новым и смежным профессиям с отрывом и без отрыва от производства от 100 до 140 человек.
В Павловском научно-инженерном центре, Владимирском центре переподготовки кадров и в других учебных центрах ежегодно будут участвовать в краткосрочных семинарах от 30 до 40 работников.
В целях изучения передового опыта по строительству, ремонту и содержанию дорог намечается ежегодно направлять в зарубежные командировки по 5-10 человек.
ГУ "Дагестанавтодор" принимаются меры по обучению и подготовке студентов - выходцев из республики в учебных заведениях республики и за ее пределами.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В экономике:
содействие экономическому росту за счет формирования рациональной дорожной сети;
снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
усиление экономической активности населения за счет увеличения транспортной доступности территорий и населенных пунктов.
В социальной сфере:
увеличение транспортной доступности районов и населенных пунктов, повышение мобильности и деловой активности населения республики за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами;
создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг;
увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечение своевременного медицинского обслуживания в отдаленных населенных пунктах республики.
В бюджетной сфере:
увеличение доходов бюджетной системы вследствие развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры, роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи строящихся и реконструируемых автомобильных дорог.
В дорожном хозяйстве:
сохранение существующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан как основы обеспечения жизнедеятельности республики, коренное улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния;
вывод дорожной сети республики на качественно новый уровень развития, отвечающий современным требованиям и интересам пользователей автомобильных дорог;
завершение соединения районных центров муниципальных образований по дорогам с асфальтобетонным покрытием с сетью дорог общего пользования, в том числе:
село Ботлих муниципального образования "Ботлихский район";
село Цуриб муниципального образования "Чародинский район";
село Мехельта муниципального образования "Гумбетовский район";
село Курах муниципального образования "Курахский район";
село Вачи муниципального образования "Кулинский район";
село Агвали муниципального образования "Цумадинский район";
снижение общих и удельных показателей аварийности на территориальных автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан и негативного воздействия на окружающую среду.

Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА"

                                                      (в ценах 2008 года, млн. рублей)
Наименование работ   	Всего на 
период  
2010-2015
годов  	В том числе по годам           	На период
2016-2020
годов  	
		2010 	2011  	2012 	2013 	2014 	2015 		
1           	2    	3   	4   	5   	6   	7   	8   	9    	
Общая потребность в    
финансовых средствах,  
всего:                 	16343,46 	3491,2	2616,26	2904,3	2909,7	2279,0	2143,0	14406,5 	
в том числе:           									
федеральный бюджет     	7843,46 	2191,2	1316,26	1504,3	1459,7	779,0 	593,0 	5305,0  	
республиканский бюджет 
Республики Дагестан    	8500,0  	1300,0	1300,0 	1400,0	1450,0	1500,0	1550,0	9101,5  	
из них:                									
строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог    
республиканского и     
межмуниципального      
значения, финансируемых
из федерального бюджета	5847,4  	1949,4	826,0 	959,0 	1068,0	595,0 	450,0 	3410,0  	
строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог    
местного значения,     
ведущих к пограничным  
заставам, финансируемых
из федерального бюджета	480,86  	160,8 	139,06 	181,0 	-   	-   	-   	-    	
строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог в  
сельской местности,    
финансируемых из       
федерального бюджета   	1042,2  	51,0 	205,0 	252,7 	256,5 	139,0 	138,0 	1545,0  	
строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог в  
сельской местности,    
подлежащих обеспечению 
круглосуточной связью с
сетью дорог общего     
пользования по дорогам 
с твердым покрытием,   
финансируемых из       
федерального бюджета   	473,0  	30,0 	146,2 	111,6 	135,2 	45,0 	5,0  	350,0  	
капитальный ремонт,    
ремонт и содержание    
дорог республиканского 
и межмуниципального    
значения, финансируемых
из республиканского    
бюджета Республики     
Дагестан               	4611,0  	739,0 	762,0 	832,0 	811,0 	692,0 	775,0 	4557,5  	
ремонт и содержание    
автомобильных дорог    
местного значения,     
финансируемых из       
республиканского       
бюджета Республики     
Дагестан               	2153,0  	220,0 	240,0 	260,0 	330,0 	512,0 	591,0 	2600,0  	
проектно-изыскательские
работы и экспертиза    
проектов               	300,0  	50,0 	50,0  	50,0 	50,0 	50,0 	50,0 	250,0  	
содержание органа      
управления дорожным    
хозяйством             	462,0  	72,0 	78,0  	78,0 	78,0 	78,0 	78,0 	390,0  	
долевое участие в      
софинансировании за    
счет средств           
республиканского       
бюджета Республики     
Дагестан               	974,0  	219,0 	170,0 	180,0 	181,0 	168,0 	56,0 	1304,0  	

Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
НАМЕЧЕННЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА,
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

                                                                                (в ценах 2008 года, млн. рублей)
N  
п/п 	Наименование объекта 	Всего на период  
2010-2015 годов  	В том числе по годам          
(числитель - км, пог. м, знаменатель-  
стоимость в млн. руб.)         	На период
2016-2020
годов  	Источник   
финансиро-  
вания    	
		км   	пог.
м  	Сумма 
(млн. 
руб.) 	2010  	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 			
1  	2           	3   	4  	5   	6   	7   	8   	9   	10  	11  	12    	13      	
1. 	Строительство         
автодороги Махачкала -
Аэропорт с подъездом к
г. Каспийску          	5,6  		192,4 	5,6/  
192,4 	-   	-   	-   	-  	-  	-    	субсидии из  
федерального 
бюджета и    
средства из  
республикан- 
ского бюджета
Республики   
Дагестан     	
2. 	Строительство подъезда
к плотине Ирганайской 
ГЭС на участке        
автодороги Буйнакск - 
Кизилюрт до Северного 
портала Гимринского   
автодорожного тоннеля 	11,233 		220,2 	11,233/
220,2 	-   	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
3. 	Строительство         
Гимринского           
автодорожного тоннеля 	4,285 		428,7 	4,285/ 
428,7 	-   	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
4. 	Реконструкция подъезда
к плотине Ирганайской 
ГЭС на участке        
автодороги Буйнакск - 
Кизилюрт до Южного    
портала Гимринского   
автодорожного тоннеля 	10,67 		358,0 	10,67/ 
358,0 	-   	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
5. 	Реконструкция         
автодороги в обход    
с. Ботлих             	9,107 		68,3 	9,107/ 
68,3  	-   	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
6. 	Реконструкция         
автодороги Манас -    
Сергокала -           
Первомайское на       
участках:             
км 0 - км 10,6        	10,6  		217,0 	6,0/  
125,0 	4,6/ 
92,0 	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
	км 10,6 - км 20,7     	10,1  		150,0 	-   	-   	-/60,0	10,1/ 
90,0 	-  	-  	-    		
7. 	Реконструкция         
автодороги Хасавюрт   
- Бабаюрт на участках 
км 0 - км 5           
км 12 - км 45         	38,0  		760,0 	-   	10/  
200,0 	10,0/ 
220,0 	10/  
200,0 	8/  
140,0	-  	-    	-//-     	
8. 	Реконструкция         
автодороги Махачкала -
Буйнакск - Леваши -   
Верхний Гуниб на      
участке км 100 - км   
115,5                 	15,5  		480,0 	-/   
170,0 	5/100 	5/  
100,0 	5,5/ 
110,0 	-  	-  	-    	-//-     	
9. 	Реконструкция         
автодороги Леваши -   
Акуша - Уркарах -     
Маджалис - Мамедкала  
на участках:          
км 20,8 - км 33,8     

км 16,8 - км 20,8     	

13,0  

4,0  		

280,0 

97,8 	

-   

4/97,8 	

-/50,0

-   	

6,2/ 
85,0 
-   	

3/  
70,0 
-   	

3,8/ 
75,0 
-  	

-  
-  	

-    
-    	
-//-     	
10. 	Реконструкция         
автодороги Касумкент -
Курах на участке      
км 22,2 - км 45       	22,8  		170,0 	4/   
34,0  	6/  
44,0 	6/  
44,0 	6,8/ 
48,0 	-  	-  	-    	-//-     	
11. 	Восстановление        
мостового перехода    
через реку Акташ на 33
км автодороги Хасавюрт
- Бабаюрт             	0,792 	78,8	45,0 	78,8 п.
м   
0,792/ 
45,0  	-   	-   	-   	-  	-  	-    	-//-     	
12. 	Реконструкция         
автодороги Муни -     
Агвали на участке     
км 0 - км 30          	30,0  		830,0 	-/   
60,0  	6/  
150,0 	6/  
150,0 	6/  
150,0 	6/  
150,0	6/  
170,0	-    	-//-     	
13. 	Реконструкция         
автодороги Ново-Гапцах
- Тагиркент - Ялама на
участках:             
км 0 - км 15          

км 15 - км 34         	

15,0  

19,0  		

150,0 

390,0 	

15,0/ 
150,0 
-   	

-   

-/  
100,0 	

-   

10/  
120,0 	

-   

9/  
170,0 	

-  

-  	

-  

-  	

-    

-    	

-//-     	
14. 	Автодорога Урма -     
Губден на участке     
км 0 - км 30          	10,0  		250,0 	-   	-   	-   	50,0 	5/  
100,0	5/  
100,0	20/   
400,0  	-//-     	
15. 	Реконструкция         
автодороги Агвали -   
Шаури - Кидеро на     
участке км 0 - км 30  	17,0  		400,0 	-   	-/  
60,0 	5/  
110,0 	5/  
110,0 	5/  
60,0 	2/  
60,0 	13/   
120,0  	
-//-     	
16. 	Реконструкция         
автодороги Гунибское  
шоссе - Вантляшевский 
перевал на участке    
км 50 - км 80         	-   		50,0 	-   	-   	-   	-   	-  	-/  
50,0 	30/   
390,0  	

-//-     	
17. 	Реконструкция         
автодороги Ботлих -   
Карата на участке     
км 0 - км 20          	20,0  		310,0 	-   	-/  
30,0 	5/  
70,0 	5/  
70,0 	5/  
70,0 	5/  
70,0 	-    	-//-     	
18. 	Строительство и       
реконструкция         
важнейших дорог       
республиканского      
значения              										90/   
2500,0  	-//-     	
	Итого                 	266,687	78,8	5847,4	78,8  
пог. м 
70,687/
1949,4 	31,6/ 
826,0 	53,2/ 
959,0 	60,4/ 
1068,0	32,8/
595,0	18,0/
450,0	153,0/  
3410,0  		

Приложение N 3
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И ГУ "ДАГЕСТАНАВТОДОР"
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН, ВЕДУЩИХ К ПОГРАНИЧНЫМ ЗАСТАВАМ,
НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ

N  
п/п 	Наименование 
района    	Наименование объекта    	Предусмотрено  
всего на период
2010-2012 годов	в том числе по годам в ценах соответствующего
периода                   	
				2010     	2011      	2012     	
			км,   
шт./пог.
м    	млн. 
руб. 	км,   
шт./пог.
м    	млн. 
руб. 	км,   
шт./пог.
м    	млн. 
руб. 	км,   
шт./пог.
м    	млн. 
руб. 	
1  	2       	3              	4    	5   	6    	7  	8    	9   	10   	11  	
1. 	Ахтынский     	Реконструкция автодороги    
Курукал - Хнов на участке км
21 - км 25                  	4,0   	28,0 	2,0   	13,0 	2,0   	15,0 	-    	-  	
		Реконструкция автодороги    
Курукал - Хнов на участке км
25 - км 27                  	2,0   	13,0 	-    	-  	-    	-   	2,0   	13,0 	
2. 	Докузпаринский	Реконструкция автодороги    
Усухчай - Куруш на участке  
км 19 - км 26               	7,0   	49,0 	2,0   	13,0 	2,0   	14,0 	3,0   	22,0 	
3. 	Рутульский    	Автодорога Рутул - Лучек -  
Джиных на участках:         
км 19 - км 20, км 22 - км 23	1,0   	8,0  	1,0   	8,0 	-    	-   	-    	-  	
		Мост на км 32 автодороги    
Рутул - Лучек - Джиных      	1/6   	6,0  	1/6   	6,0 	-    	-   	-    	-  	
		Автодорога Рутул - Лучек -  
Джиных на участке  км 47 -  
км 49                       	2,0   	16,0 	-    	-  	1,0   	7,0  	1,0   	9,0 	
4. 	Тляратинский  	Автодорога Тлярата - Камилух
на участке км 22 - км 24    	2,0   	12,4 	2,0   	12,4 	-    	-   	-    	-  	
		Реконструкция автодороги    
Тлярата - Камилух на участке
км 24 - км 27               	3,0   	20,86 	-    	-  	3,0   	20,86 	-    	-  	
		Реконструкция автодороги    
Тлярата - Камилух на участке
км 27 - км 30               	3,0   	23,2 	-    	-  	-    	-   	3,0   	23,2 	
5. 	Цумадинский   	Реконструкция автодороги    
Агвали - Сильдинская речка -
Гакко на участке км 4 - км  
9,5                         	5,5   	52,4 	5,5   	52,4 	-    	-   	-    	-  	
6. 	Цунтинский    	Реконструкция автодороги    
Агвали - Шаури - Кидеро на  
участке Эчеда - Сагада км 19
- км 28                     	9,0   	68,0 	-    	-  	4,0   	28,0 	5,0   	40,0 	
		Мост на км 1 автодороги     
Кидеро - Хутрах             	1/10  	7,2  	-    	-  	1/10  	7,2  	-    	-  	
		Мост на км 21 автодороги    
Кидеро - Хутрах             	1/25  	18,0 	1/25  	18,0 	-    	-   	-    	-  	
		Автодорога Мокок - Ретлоб на
участке км 2 - км 9         	7,0   	69,0 	3,0   	27,0 	2,0   	20,0 	2,0   	22,0 	
		Автодорога Ретлоб - Асах -  
Махалотли на участке        
км 10 - км 12               	2    
1/10  	26,8 	-    	-  	1,0   	14,0 	1    
1/10  	12,8 	
		Мост на 5 км автодороги     
Ретлоб - Асах - Махалотли   	1/24  	30,0 	-    	-  	-    	-   	1/24  	30,0 	
		Мост на 8 км автодороги     
Ретлоб - Асах - Махалотли   	1/10  	9,0  	-    	-  	-    	-   	1/10  	9,0 	
		Автодорога Мокок -          
Междуречье через Шапих на   
участке км 0,5 - км 4,5     	4,0   	24,0 	2,0   	11,0 	2,0   	13,0 	-    	-  	
Всего                                           	51,5  
6/85,0  	480,86	17,5  
2/31,0  	160,8	17,0  
1/10,0  	139,06	17,0  
3/44,0  	181,0	

Приложение N 4
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВЯЗЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
С ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД
2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

                                                                               (в ценах 2008 года, млн. рублей)
N 
п/п	Наименование объекта 	Всего      
на 2010-2015 годы	В том числе по годам          
(числитель - км, пог. м,        
знаменатель - стоимость в млн. руб.)  	На  
период
до  
2020 
года 	Источник      
финансирования   	
		км  	пог.
м  	Сумма 
(млн. 
руб.) 	2010	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 			
1 	2           	3  	4  	5   	6  	7   	8   	9   	10  	11  	12  	13         	
1. 	Автодорога Гоа - Фите 
на участке км 0 - км 7	7,0 	-  	42,5 	-  	2/12,0	2/12,0	1/6,5 	2/12,0	-   	-   	субсидии из        
федерального       
бюджета и средства 
из республиканского
бюджета Республики 
Дагестан           	
2. 	Автодорога Ботлих -   
Карата - Цолода на    
участке км 2 - км 10  	8,0 	-  	56,0 	-  	-   	2/  
14,0 	2/  
14,0 	2/  
14,0 	2/  
14,0 	-   	-//-        	
3. 	Автодорога Карата -   
Верхнее Инхело        	4,0 	-  	20,0 	-  	4/  
20,0 	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
4. 	Подъезд к с. Обох на  
автодороге Гуниб -    
Кумух на участке      
км 0 - км 6           	6,0 		36,0 	-  	-   	3/  
18,0 	3/  
18,0 	-   	-   	-   	-//-        	
5. 	Автодорога Гели -     
санаторий "Талги" на  
участке км 22 - км    
24,1                  	2,1 	-  	5,7  	-  	-   	2,1/ 
5,7  	-   	-   	-   	-   	-//-        	
6. 	Автодорога Геджух -   
Дюбек - Джавгат на    
участке км 0 - км 18  	18  		72,0 	-  	-   	6/  
24,0 	6/  
24,0 	6/  
24,0 	-   	-   	-//-        	
7. 	Автодорога от         
автодороги Астрахань -
Махачкала до с. Новая 
Коса                  	6,0 	-  	70,0 	-  	-   	-   	-   	-   	6/  
70,0 	20/  
200,0 	-//-        	
8. 	Автодорога Новый Захит
- Сенгер на участке   
км 0 - км 2           	2,0 		12,0 	-  	2/  
12,0 	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
9. 	Подъезд от автодороги 
Тлярата - Камилух     
до с. Гараколоб на    
участке км 0 - км 2,8 	2,8 		16,0 	-  	1,8/ 
10,0 	1/  
6,0  	-   	-   	-   	-   	-//-        	
10.	Автодорога Ланда -    
Балагида - Харада на  
участке км 3 - км 5,5 	2,5 		20,0 	-  	2,5/ 
20,0 	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
11.	Автодорога Анцух -    
Ланда на участке      
км 2 - км 5           	3,0 		10,0 	-  	3/  
10,0 	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
12.	Автодорога от         
автодороги Тлярата -  
Камилух до с. Бетельда
на участке км 0 - км 1	1,0 		4,0  	-  	1/  
4,0  	-   		-   	-   	-   	-//-        	
13.	Автодорога Унцукуль - 
Моксох на участке     
км 12 - км 13         	1,0 		4,0  	-  	1/  
4,0  	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
14.	Подъезд от автодороги 
Кумух - Вихли - Вачи  
до с. Иниша на участке
км 0 - км 5           	5,0 		24,0 	-  	-   	-   	-   	3/  
14,0 	2/  
10,0 	-   	-//-        	
15.	Мостовой переход на   
автодороге Тадмагитль 
- Тлибишо             	-  	-  	-   	-  	-   	-   	-   	-   	-   	100 п.
м   
200,0 	-//-        	
16.	Автодорога Уриб -     
Зауриб до с. Колоб    
км 1 - км 7           	6,0 		36,0 	-  	2/  
12,0 	2/  
12,0 	2/  
12,0 	-   	-   	-   	-//-        	
17.	Автодорога Аргвани -  
Нижнее Аргвани до     
с. Гадари на участке  
км 0 - км 8           	8,0 		48,0 	-  	-   	2/  
12,0 	2/  
12,0 	2/  
12,0 	2/  
12,0 	-   	-//-        	
18.	Автодорога Качалай -  
Караузек на участке   
км 0 - км 5           	5,0 		35,0 	-  	-   	-/  
10,0 	5/  
25,0 	-   	-   	-   	-//-        	
19.	Автодорога Хучни -    
Халаг на участке      
км 0 - км 6           	6,0 	-  	30,0 	-  	2/  
10,0 	2/  
10,0 	2/  
10,0 	-   	-   	-   	-//-        	
20.	Автодорога Уржагимахи 
- Хурби на участке    
км 0 - км 4           	4,0 	-  	15,0 	-  	-   	-   	-   	2/  
8,0  	2/  
7,0  	-   	-//-        	
21.	Автодорога в обход    
с. Мокок              	2,0 		28,0 	-  	-   	-/  
12,0 	2/  
16,0 	-   	-   	-   	-//-        	
22.	Автодорога Хасавюрт - 
Адильотар - Сулевкент 
на участке км 9 - км  
30                    	21,0 		142,0 	6/ 
36,0	-   	7/  
42,0 	8/  
64,0 	-   	-   	-   	-//-        	
23.	Подъезд от автодороги 
Хасавюрт - Адильотар -
Сулевкент к с. Тукита 
через с. Сиух         	7,0 		56,0 	-  	7/  
56,0 	-   	-   	-   	-   	-   	-//-        	
24.	Подъезд от            
республиканской       
автодороги Манас -    
Сергокала -           
Первомайское до       
с. Кадиркент          	3,0 		20,0 	-  	-   	3/  
20,0 	-   	-   	-   	-   	-//-        	
25.	Автодорога Орта-тюбе -
Уй-Салган             	12,0 		60,0 	-  	-   	4/  
20,0 	4/  
20,0 	4/  
20,0 	-   	-   	-//-        	
26.	Подъезд от автодороги 
Манас - Сергокала -   
Первомайское до       
с. Мюрего             	8,0 		40,0 	-  	4/  
20,0 	4/  
20,0 	-   	-   	-   	-   	-//-        	
27.	Строительство         
автодороги Митрада -  
Новое Хварши          	10,0 	-  	65,0 	-  	-   	-   	3/20,0	3/20,0	4/25,0	-   	-         	
28.	Строительство         
автодороги Агвали -   
Сильдинская речка -   
Саситли - Кеди        	2,5 	-  	15,0 	2,5/
15,0	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-         	
29.	Реконструкция         
автодороги Маджалис - 
Джавгат на участке    
км 0 - км 21          	21,0 	-  	60,0 	-  	5/15,0	5/15,0	5/15,0	6/15,0	-   			
30.	Строительство и       
реконструкция         
автомобильных дорог   
местного значения     										145/ 
1145,0	-//-        	
Итого           	183,9	-  	1042,2	8,5/
51,0	37,3/ 
205,0 	45,1/ 
252,7 	45,0/ 
256,5 	30,0/ 
139,0 	18,0/ 
138,0 	100  
пог. м
165/ 
1545,0		

Приложение N 5
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЮ
С СЕТЬЮ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ФЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
(2002-2010 ГОДЫ)" ("РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА"),
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Населенные
пункты  	Титул дороги   	Кол-во 
жителей,
чел.  	Транс- 
портный
разрыв,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	2010     	2011     	2012     	2013     	2014     	2015     	На период   
2016-2020   
годов     	
					Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	Объем 
финан-
сиро- 
вания,
млн. 
руб. 	Кол-во,
км   	
1     	2        	3    	4   	5   	6   	7   	8   	9   	10  	11   	12  	13   	14  	15   	16  	17   	18  	19   	
Оттал     	Автодорога Джиных
-  Оттал - Мухах 	393   	6,0  	40,0 			13,2 	2,0  	13,6 	2,0  	13,2 	2,0  							
Барнаб    	Подъезд от       
автодороги       
Тлярата - Камилух
- Кардиб до      
с. Барнаб        	315   	2,0  	20,0 							10,0 	1,0  	10,0 	1,0  					
Сикар     	Подъезд от       
автодороги       
Тлярата -        
Камилух -  Кардиб
к с. Сикар       	200   	4,0  	10,0 									5,0  	2,0  	5,0  	2,0  			
Шидиб     	Автодорога Ланда 
-  Росноб - Шидиб	128   	2,0  	20,0 					10,0 	1,0  	10,0 	1,0  							
Бежуда    	Автодорога от    
подъезда         
автодороги ГШВП -
Начада к         
с. Бежуда        	155   	5,0  	40,0 	15,0 	2,0  	25,0 	3,0  											
Хварши    	Подъезд от       
автодороги Агвали
-  Шаури - Кидеро
до с. Хварши     	179   	14,0  	140,0 	5,0  	-   	35,0 	4,0  	40,0 	4,0  	40,0 	4,0  	20,0 	2,0  	-   	-   			
Хамар     	Подъезд от       
автодороги       
Тлярата -        
Камилух к        
с. Хамар         	150   	2,5  	20,0 			20,0 	2,5  											
Заречное  	Автодорога Кизляр
-  Заречное      	200   	7,0  	42,0 			18,0 	3,0  	24,0 	4,0  									
Тляцуда   	Автодорога       
от автодороги    
Агвали -  Шаури -
Кидеро до        
с. Тляцуда       	510   	2,0  	20,0 							10,0 	1,0  	10,0 	1,0  					
Хамакал   	Автодорога       
от автодороги    
Уриб -  Зиуриб - 
Верхний Колоб до 
с. Хамакал       	195   	2,0  	20,0 							20,0 	2,0  							
Курдул    	Автодорога Рутул 
- Лучек -  Джиных
к с. Курдул      	150   	7,0  	21,0 					9,0  	3,0  	12,0 	4,0  							
Симсир    	Автодорога       
Османюрт - Симсир	3000  	3,0  	30,0 	10,0 	0,0  	20,0 	3,0  											
Кара-тюбе 	Подъезд от       
республиканской  
автодороги до    
Бабаюрт -        
Каратюбе         	800   	10,0  	50,0 	-   	-   	15,0 	3,0  	15,0 	3,0  	20,0 	4,0  	-   	-   	-   	-   	-   	-   	
Населенные пункты,          
подлежащие соединению с     
сетью дорог общего          
пользования                 																350,0 	60,0  	
Итого                       	6375  	66,5  	473,0 	30,0 	2,0  	146,2 	20,5  	111,6 	17,0  	135,2 	19,0  	45,0 	6,0  	5,0  	2,0  	350,0 	60,0  	

Приложение N 6
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ОБЪЕМЫ
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

N 
п/п	Наименование работ   	Всего на   
период    
2010-2015  
годов    	В том числе по годам                       	На период 
2016-2020 
годов   	
			2010    	2011   	2012   	2013   	2014   	2015   		
		км   	шт./ 
пог. 
м  	км  	шт./ 
пог. 
м  	км  	шт./
пог.
м  	км  	шт./
пог.
м  	км  	шт./
пог.
м  	км 	шт./
пог.
м  	км 	шт./
пог.
м  	км  	шт./ 
пог. 
м  	
1 	2           	3   	4  	5   	6  	7  	8  	9  	10 	11  	12 	13 	14 	15 	16 	17  	18  	
1. 	Строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог    
республиканского и     
межмуниципального      
значения, финансируемых
из федерального бюджета	266,687	1/  
78,8 	70,687	1/  
78,8 	31,6 	-  	53,2 	-  	60,4 	-  	32,8	-  	18,0	-  	153,0	-  	
2. 	Строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог    
местного значения,     
ведущих к пограничным  
заставам, финансируемых
из федерального бюджета	51,5  	6/  
85,0 	17,5 	2/  
31,0 	17,0 	1/ 
10,0	17,0 	3/ 
44,0	-  	-  	-  	-  	-  	-  	-  	-  	
3. 	Строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог в  
сельской местности,    
финансируемых из       
федерального бюджета   	183,9 	-  	8,5  	-  	37,3 	-  	45,1 	-  	45,0 	-  	30,0	-  	18,0	-  	165,0	100,0	
4. 	Строительство и        
реконструкция          
автомобильных дорог в  
сельских населенных    
пунктах, подлежащих    
обеспечению            
круглосуточной связью с
сетью автомобильных    
дорог общего           
пользования по дорогам 
с твердым покрытием    	66,5  	-  	2,0  	-  	20,5 	-  	17,0 	-  	19,0 	-  	6,0 	-  	2,0 	-  	60,0 	-  	
	Итого                  	568,587	7/  
163,8	98,687	3/  
109,8	106,4	1/ 
10,0	132,3	3/ 
44,0	124,4	-  	68,8	-  	38,0	-  	378,0	100,0	

Приложение N 7
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

                                                                               (в ценах 2008 года, млн. рублей)
N  
п/п 	Наименование объекта   	Всего на период 
2010-2015 годов 	в том числе по годам          
(числитель - км, пог. м, знаменатель - 
стоимость в млн. руб.)         	На период
2016-2020
годов  	Вид    
ремонта  	
		км  	пог.
м  	Сумма 
(млн. 
руб.) 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 			
1  	2            	3  	4  	5   	6   	7   	8   	9   	10  	11  	12    	13     	
1. 	Автодорога Кизляр -      
Терекли-Мектеб - граница 
Ставропольского края на  
участке км 20 - км 115   	56  	-  	155,0 	10/  
30,0 	10/  
30,0 	10/  
20,0 	10/  
30,0 	6/  
15,0 	10/  
30,0 	39/   
115,0  	ремонт     	
2. 	Автодорога Ставрополь -  
Прохладный - Моздок -    
Кизляр - Крайновка на    
участке км 477 - км 554  	60  	-  	150,0 	10/  
25,0 	10/  
25,0 	10/  
25,0 	10/  
25,0 	10/ 
25,0 	10/  
25,0 	17/   
42,5   	ремонт     	
3. 	Автодорога Хасавюрт -    
Тлох на участке км 78 -  
км 92                    	14  		200,0 	5/  
85,0 	5/  
75,0 	4/  
40,0 					капитальный
ремонт     	
4. 	Автодорога Хасавюрт -    
Тлох на участке км 0 - км
23                       	23  		46,0 			6/  
12,0 	6/  
12,0 	6/  
12,0 	5/  
10,0 		ремонт     	
5. 	Автодорога Хасавюрт -    
Гребенская на участке    
км 0 - км 35             	35  		70,0 			8/  
16,0 	8/  
16,0 	9/  
18,0 	10/  
20,0 		ремонт     	
6. 	Автодорога Ботаюрт -     
Львовский на участке     
км 0 - км 15             	15  		30,0 				5/10,0	5/  
10,0 	5/10,0		ремонт     	
7. 	Автодорога Батаюрт -     
Львовский на участке     
км 15 - км 30            	15  		96,0 	3/  
24,0 	6/  
42,0 	6/  
30,0 					капитальный
ремонт     	
8. 	Автодорога Махачкала -   
Буйнакск - Леваши -      
Верхний Гуниб на         
участках:                
км 32 - км 62            	

30  		

60,0 		

10/  
20,0 	

10/  
20,0 	

10/  
20,0 				

ремонт     	
	км 72 - км 100           	-  									28/   
56,0   	ремонт     	
	км 133 - км 142          	9  		27,0 	3/  
9,0  	3/  
9,0  	3/  
9,0  					капитальный
ремонт     	
	км 0 - км 32             	-  									32/   
64,0   	ремонт     	
9. 	Автодорога Гергебиль -   
Махачкала - Верхний Гуниб
через с. Курми на участке
км 0 - км 9              	9  		45,0 				3/  
15,0 	3/  
15,0 	3/  
15,0 		капитальный
ремонт     	
10. 	Автодорога Буйнакск -    
Кизилюрт на участке      
км 0 - км 50             	40  		80,0 			10/  
20,0 	10/  
20,0 	10/ 
20,0 	10/  
20,0 	10/   
20,0   	ремонт     	
11. 	Автодорога Карабудахкент 
- Нижний Дженгутай на    
участке км 10 - км 21    	11  		22,0 		11/  
22,0 						ремонт     	
12. 	Автодорога Манас -       
Сергокала - Первомайское 
на участках:             
км 23+500 - км 30        	

6,5 		

45,0 	

3/  
21,0 	

3,5/ 
24,0 						

капитальный
ремонт     	
	км 30 - км 40            	10  		20,0 	5/  
10,0 	5/  
10,0 						ремонт     	
	км 40 - км 46            	6  		42,0 	6/  
42,0 							капитальный
ремонт     	
13. 	Автодорога Леваши -      
Сергокала на участке     
км 2 - км 37             	35  		70,0 	6/  
12,0 	6/  
12,0 	6/  
12,0 	6/  
12,0 	6/  
12,0 	5/  
10,0 		ремонт     	
14. 	Автодорога Цудахар -     
Акуша на участке         
км 0 - км 6              	6  		42,0 	3/  
21,0 	3/  
21,0 							
15. 	Автодорога Мамраш -      
Ташкапур - Араканский    
мост на участках:        
км 38 - км 72            	

24  		

120,0 				

8/  
40,0 	

8/  
40,0 	

8/  
40,0 	

10/   
50,0   	

капитальный
ремонт     	
	км 133 - км 147          	14  		70,0 			3/  
15,0 	3/  
15,0 	3/  
15,0 	5/  
25,0 		капитальный
ремонт     	
	км 160 - км 169          	9  		39,0 	9/  
39,0 							капитальный
ремонт     	
	км 176 - км 186          	10  		30,0 		5/  
15,0 	5/  
15,0 					ремонт     	
	км 186 - км 206          	20  		140,0 	5/  
35,0 	5/  
35,0 	5/  
35,0 	5/  
35,0 				капитальный
ремонт     	
16. 	Автодорога Гунибское     
шоссе - Вантляшевский    
перевал на участках:     
км 20 - км 28            	

8  		

40,0 	

4/  
20,0 	

4/  
20,0 						

капитальный
ремонт     	
	км 35 - км 75            	20  		100,0 			5/  
25,0 	5/  
25,0 	5/  
25,0 	5/  
25,0 	20/   
100,0  	капитальный
ремонт     	
	км 92 - км 112           										20/   
100,0  		
17. 	Автодорога Чалда -       
Карадах на участке       
км 0 - км 9              	4  		20,0 						4/  
20,0 	5/    
25,0   	капитальный
ремонт     	
18. 	Автодорога Грозный -     
Ботлих - Араканская      
площадка на участках:    
км 222 - км 231          	

4  		

32,0 	

4/  
32,0 							

капитальный
ремонт     	
	км 196 - км 207          	11  		88,0 			6/  
48,0 	5/  
40,0 				капитальный
ремонт     	
	км 127 - км 152          										25/   
50,0   	ремонт     	
19. 	Автодорога Леваши - Акуша
- Уркарах - Маджалис -   
Мамедкала на участках:   
км 0 - км 26             	

26  		

52,0 		

8/  
16,0 	

8/  
16,0 	

10/  
20,0 				

ремонт     	
	км 129 - км 149          	20  		40,0 		5/  
10,0 	5/  
10,0 	5/  
10,0 	5/  
10,0 			ремонт     	
	км 5 - км 25             	20  		120,0 		4/  
24,0 	4/  
24,0 	4/  
24,0 	4/  
24,0 	4/  
24,0 		капитальный
ремонт     	
20. 	Автодорога Дербент -     
Хучни - Хив на участке   
км 17 - км 37            	20  		40,0 			10/  
20,0 	10/  
20,0 				ремонт     	
21. 	Автодорога Магарамкент - 
Ахты - Рутул на участках:
км 27 - км 29, км 82     	

3  		

30,0 	

2/  
20,0 	

1/  
10,0 						

капитальный
ремонт     	
	км 0 - км 27             	27  		54,0 				9/  
18,0 	9/  
18,0 	9/  
18,0 		ремонт     	
	км 29 - км 42            	13  		26,0 			13/  
26,0 					ремонт     	
	км 62 - км 82            	20  		120,0 			5/  
30,0 	5/  
30,0 	5/  
30,0 	5/  
30,0 		капитальный
ремонт     	
22. 	Атодорога Буйнакск -     
Терменлик на участке     
км 0 - км 12             	12  		54,0 			6/  
27,0 	6/  
27,0 				капитальный
ремонт     	
23. 	Автодорога Кизилюрт -    
Шамхалянгиюрт - Сулак на 
участках:                
км 13 - км 26            	

13  		

39,0 	

6/  
18,0 	

7/  
21,0 						

ремонт     	
	км 32 - км 54            	22  		132,0 	6/  
36,0 	6/  
36,0 	5/  
30,0 	5/  
30,0 				капитальный
ремонт     	
24. 	Автодорога Гуниб - Цуриб 
на участке км 7 - км 21  	14  		130,0 	5/  
40,0 	5/  
50,0 	4/  
40,0 					капитальный
ремонт     	
25. 	Автодорога Мамедкала -   
Хучни на участке         
км 7 - км 29             	10  		80,0 					5/  
40,0 	5/  
40,0 	12/   
90,0   	капитальный
ремонт     	
26. 	Автодорога Татиль -      
Сиртыч на участке км 38 -
км 44                    	6  		36,0 	3/  
18,0 	3/  
18,0 						капитальный
ремонт     	
27. 	Автодорога Новокули -    
Нажаюрт (в черте         
сс. Банайюрт и Ямансу)   	4  		32,0 	4/  
32,0 							капитальный
ремонт     	
28. 	Ремонт важнейших дорог   
республиканского значения										434/   
1660,0  		
	Итого                    	734,5		2864,0	102,0/
569,0 	125,5/
545,0 	157,0/
565,0 	148,0/
494,0 	99,0/
329,0	103,0/
362,0 	652,0/  
2372,5  		

Приложение N 8
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

РАСЧЕТ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА РЕМОНТ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ
И ДО 2020 ГОДА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

                                                (в ценах 2008 года, млн. рублей)
Наименование работ   	Всего на 
период  
2010-2015
годов  	В том числе по годам        	На период
2016-2020
годов  	
		2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 		
1           	2    	3  	4  	5  	6  	7  	8  	9    	
Ремонт автомобильных   
дорог местного значения	1113,0  	100,0	100,0	100,0	150,0	312,0	351,0	1200,0  	

Приложение N 9
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ОБЪЕМЫ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВ НА ПЕРИОД 2010-2015
ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

N  
п/п 	Наименование  
работ      	Всего на  
период 2010-
2015 годов 	В том числе по годам                        	На период 
2016-2020 
годов   	
			2010   	2011   	2012   	2013   	2014    	2015    		
		км  	пог. 
м  	км  	пог.
м  	км  	пог.
м  	км  	пог.
м  	км  	пог.
м  	км  	пог. 
м  	км  	пог. 
м  	км  	пог.
м  	
1  	2        	3   	4  	5  	6  	7  	8  	9  	10 	11  	12 	13  	14  	15  	16  	17  	18 	
1. 	Капитальный     
ремонт и ремонт 
автомобильных   
дорог и         
искусственных   
сооружений      
республиканского
значения        	734,5 	-  	102,0	-  	125,5	-  	157,0	-  	148,0	-  	99,0 	-  	103,0	-  	652,0 		
2. 	Капитальный     
ремонт и ремонт 
автомобильных   
дорог и         
искусственных   
сооружений      
местного        
значения        	476,6 	678,0	30,0 	48,0	30,0 	49,0	38,0 	50,0	78,0 	91,0	140,6	200,0	160,0	240,0	1100,0		
	Всего      	1211,1	678,0	132,0	48,0	155,5	49,0	195,0	50,0	226,0	91,0	239,6	200,0	263,0	240,0	1752,0		

Приложение N 10
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

РАСЧЕТ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
НА СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДОВ
И ДО 2020 ГОДА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

                                                                 (в ценах 2008 года, млн. рублей)
N 
п/п	Наименование работ    		Всего на 
период  
2010-2015
годов  	В том числе по годам           	На период
2016-2020
годов  	
				2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 		
1 	2            	3  	4    	5   	6   	7   	8   	9   	10  	11    	
1. 	Содержание автомобильных 
дорог республиканского и 
межмуниципального        
значения                 	сумма	1440,0  	140,0 	180,0 	220,0 	260,0 	300,0 	340,0 	1800,0  	
		км  		2478,0	2478,0	2304,0	2304,0	2304,0	2304,0	2340,0  	
2. 	Содержание автомобильных 
дорог местного значения  	сумма	1040,0  	120,0 	140,0 	160,0 	180,0 	200,0 	240,0 	1400,0  	
		км  		5416,0	5441,0	5464,0	5486,0	5506,0	5525,0	5665,0  	
3. 	Разметка                 		120,0  	15,0 	17,0 	19,0 	21,0 	23,0 	25,0 	125,0  	
4. 	Планово-предупредительные
работы на мостах         		187,0  	15,0 	20,0 	28,0 	36,0 	40,0 	48,0 	260,0  	
	Всего                    	сумма	2787,0  	290,0 	357,0 	427,0 	497,0 	563,0 	653,0 	3585,0  	
		км  		7894,0	7919,0	7768,0	7790,0	7810,0	7829,0	8005,0  	

Приложение N 11
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

РАСЧЕТ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ПЕРИОД
2010-2015 ГОДОВ И ДО 2020 ГОДА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

                                                    (в ценах 2008 года, млн. рублей)
N 
п/п	Наименование      
работ         	Всего на 
период  
2010-2015
годов  	В том числе по годам        	На период
2016-2020
годов  	
			2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 		
1 	2           	3    	4  	5  	6  	7  	8  	9  	10    	
1. 	Проектно-изыскательские
работы и экспертиза    
проектов               	300,0  	50,0 	50,0 	50,0 	50,0 	50,0 	50,0 	250,0  	
2. 	Содержание органа      
управления дорожным    
хозяйством             	462,0  	72,0 	78,0 	78,0 	78,0 	78,0 	78,0 	390,0  	
	Всего                  	762,0  	122,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	640,0  	

Приложение N 12
к республиканской целевой программе
"Развитие территориальных автомобильных дорог
общего пользования Республики Дагестан
на период 2010-2015 годов и до 2020 года"

ПОКАЗАТЕЛИ
СЕТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

N  
п/п 	Основные показатели  
дорожной сети     	Единица 
измерения	Годы         	
			На    
01.01.2010	На    
01.01.2015	
1  	2           	3    	4     	5     	
1. 	Общая протяженность   
территориальных дорог,
в том числе:          	км    	7894,0  	7829,0  	
	По типам покрытия:    				
	асфальтобетонное      		2555,0  	2748,0  	
	гравийное             		4827,0  	4676,0  	
	грунтовое             		512    	405    	
	По категориям:        				
	I                     		16    	22    	
	II                    		38    	80    	
	III                   		1123   	1169   	
	IV                    		3431   	3705   	
	V                     		2774   	2448   	
	внекатегорийные       		512    	405    	
2. 	Количество мостов,    
в том числе:          	шт./пог. 
м    	1226/29449	1238/29740	
	в неудовлетворительном
состоянии             	шт./пог. 
м    	364/8740 	304/7301 	
	с недостаточным       
габаритом             	шт./пог. 
м    	321/7710 	298/7158